특  수  공  시

2010회계연도 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2010년도】                                           (단위 : 억원)

연번	사 업 명	사 업 개 요	총 사 업 비	분 야	우선 순위
1	순창장류밸리 조성사업	2007~2016년 A=352,453㎡	1,428 국 785 도 177 군 281 기타 185	산 업 연 구
2	농촌마을 종합개발사업	2009~2015년 5개권역 생활환경정비 및 소득기반조성	243 국164 도 16 군 56 자부담 7	농 촌 환 경
3	복흥ㆍ쌍치 농촌생활용수개발사업	2008~2012년 취수시설 1,650㎥/일 정수시설 1,500㎥/일 송배수관로 25㎞ 등	200 국160 군40	농 촌 환 경
4	추령천 수해상습지 개선사업	2007~2011년 하천개수 7.61km	141.5 국84.9 도28.3 군28.3	환 경 문 화
5	경천 생태하천 조성사업	2009~2012년 생태하천 조성 3.6km	70 국42 도14 군14	환 경 문 화

1.  순창장류밸리 조성사업

실 태		○ 한류와 웰빙형 생활방식 추구로 한식의 세계적 관심집중 ○ FTA에 따른 식품의 개방으로 기업체 경쟁력 제고방안 필요

추진방향		○ 장류산업 네트워크 구축과 발효식품의 산업화․세계화

사 업 개 요

위     치 : 순창읍 백산리 일원(A=352,453㎡)

사업기간 : 2007 ～ 2016년

총사업비 : 1,428.5억원(국 784.5  도 176.8  군 281.7  기타 185.5)

세부사업 : 발효미생물종합활용센터, 제2생산단지 조성, 전통발효식품전용공장, 전통절임류 세계화지원센터, 웰빙관광쉼터 등 조성

구 분	사 업 명	사업 기간	사업비 (억원)	주요사업내용	진행상황
	계		1,428.5
1단계	순창전통고추장 민속마을	‘93~’97	152	전통고추장제조업체집적화 공동오폐수처리시설 등	완 료
	장류연구소	‘05~’06	60	연구소,Pilot plant,세미나실	완 료
	장류박물관	‘05~’06	32.5	박물관 1동	완 료
	장류체험관	‘05~’06	19.5	체험관, 숙박동	완 료
	RIS (1단계)	'05~'07	46	순창장류산업클러스터구축	완 료
2단계 (H/W)	발효미생물종합 활용센터	‘07-’10	312	HACCP 공장, 미생물관리센터	완 료
	제2생산단지조성	‘09-’11	25.3	전통장류 중소기업 단지	1차 조성완료 (매각공고중)
	전통발효식품 (장류)전용공장	‘09-’11	100	전통된장․간장표준화생산시설	‘11.7월 58% (‘11.12월준공)
	전통절임류 세계화지원센터	‘09-’11	100	쌈무, 장류절임장아찌 생산시설	‘11.7월 38% (‘12.2월준공)
	콩이․팡이공원 주차 및 편의시설	‘12-’13	40	발효산업단지내 공원 및 편의시설	기본계획수립 (‘12년 착공)
	웰빙관광쉼터	‘12-’16	500	먹거리장터, 고추식품원, 팬션단지 등,	기본계획수립
(S/W)	RIS (2단계)	‘08-’10	41.2	마켓팅, 인력양성, 기술개발 및 이전, 네트워크 구축 등	완료 (재단법인설립)

사업진행 현황

조 감 도

2.  농촌마을 종합개발사업

실 태		○ 농촌의 낙후 및 생활환경 불편 사유로 인구의 도시로 이동 ○ 인구감소와 고령화로 마을 공동화 현상 및 지역 침체 가중

추진방향		○ 지역의 특색 있는 발전 도모로 지역주민의 최소한의 삶의 질 향상 ○ 마을단위 공동체 활성화 및 지역사회 유지 도모

사 업 개 요

위    치 : 5개 권역(회문산, 강천산, 서암, 섬진강, 방산)

사업기간 : 2009 ~ 2015년

사 업 비 : 243억원(국 164  도 16  군 56  자부담 7)

사업내용 :

•H/W : 생활환경정비, 경관개선, 소득기반조성, 문화복지시설 설치

•S/W : 주민교육, 컨설팅, 홍보마케팅, 정보화구축, 마을경영 등

사업진행 현황

연도별 주요사업 추진 현황

•2008년

- 회문산권역 대상지 선정 및 기본계획 수립완료

•2009년

- 회문산권역 : 1단계 세부설계 및 도농교류센터 부지매입

- 강천산권역(1월), 서암권역(12월) 대상지 선정

•2010년

- 회문산권역 : 신기ㆍ학현 노인회관 신축, 장류가공시설 지원

- 강천산권역 : 기본계획 수립, 버섯배지 가공시설 지원

- 서암권역 : 기본계획 수립

- 섬진강ㆍ방산권역 : 신규사업 타당성 검토 결과 대상지 선정

•2011년

- 회문산권역 및 강천산권역 : 도농교류센터 및 다목적회관 착공

- 서 암 권 역 : 다목적회관ㆍ쉼터 감정평가 및 부지매입

- 섬진강․방산권역 : 기본계획 수립 및 세부설계

- 지역발전사업 평가 결과 : 우수(S등급)분야 선정 (‘11. 6월, 농식품부)

조 감 도

3.  복흥․쌍치 농촌생활용수개발사업

실 태		○ 복흥․쌍치면 지역 주변환경 변화로 지하수․계곡수 오염 및 고갈되어 안정적이고 맑은 물 공급 수요 급증

추진방향		○ 주민들에게 보다 더 양질의 음용수 제공과 용수 소요량 증가에 맞추어 공급 능력과 수급 능력의 체계적 정비로 원활한 생활 용수 공급

사 업 개 요

위    치 : 순창군 복흥면, 쌍치면 일원

사업기간 : 2008 ~ 2012년

사 업 비 : 200억원(국 160  군 40)

사업내용 : 취수시설 1,650㎥/일, 정수시설 1,500㎥/일,

배수지415㎥/일, 송배수관로 25km 등

사업진행 현황

진행상황 개요보고

- 수도사업 인가 및 기타 행정절차 이행 완료로 본격적인 사업

진행(정수장 건립, 관로매설)

연도별 주요사업 추진 현황

- 2008년 : 순창군 상수도 기본계획 변경 수립 및 실시설계용역

- 2009년 : 실시설계 및 수도 사업 인가

- 2010년 : 사업 착수 및 정수장 부지 정리

- 2011년 : 정수장 지하구조물 설치 및 관로 부설

조 감 도

4.  추령천 수해상습지 개선사업

실 태		○ 하천범람으로 인한 농경지, 가옥침수 등 상습적인 피해 발생

추진방향		○ 하천개수를 통한 쾌적한 생활환경 조성 및 수해피해 예방

사 업 개 요

위    치 : 복흥면 동산리, 서마리, 쌍치면 금평리

사업기간 : 2007 ~ 2011년

사 업 비 : 141.5억원(국 84.9  도 28.3  군 28.3)

사업내용 : 하천개수 7.61km(기 완료 6.96km)

사업진행 현황

동산제, 석현제 사업추진 : 2007. 1월 ~ 2010. 12월

추령제 실시설계용역 : 2011. 7월 ~ 10월

분할측량 및 용지매입 : 2010. 10월 ~ 2011. 12월

사업시행 : 2011. 10월 ~ 2012. 12월

위 치 도

현황사진

5.  경천 생태하천 조성사업

실 태		○ 집중호우 시 홍수에 취약한 시가지에 대한 피해 예방대책 마련 절실

추진방향		○ 친환경 친수시설 정비로 건강증진 및 정서함양을 위한 생태하천 조성

사 업 개 요

위    치 : 순창읍 가남리 상촌교 ~ 순창읍 백산리 대모암

사업기간 : 2009 ~ 2012년

사 업 비 : 70억원(국 42  도 14  군비 14)

사업내용 : 생태하천 조성 3.6km

사업진행 현황

하천기본계획변경 및 실시설계용역 : 2009. 6월 ~ 2010. 2월

발주 및 착공 : 2010. 1월

분할측량 및 용지매입 : 2009. 12월 ~ 2010. 12월

사업시행 : 2010. 2월 ~ 2012. 12월

위 치 도

현황사진