109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 순창군에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
순창 실내 다목적 구장 건립사업	3,000	2,480	520	-	2016	2013	100%
교성지구 하수 관거 정비사업	7,164	1,584	3,728	1,852	2017	2013	70%
구미지구 마을 하수도 설치사업	2,300	1,903	397	-	2016	2014	100%
축산진흥센터 조성사업	3,000	500	920	1,580	2017	2014	100%
순창 농특산물 활용 식문화융합 기반조성사업	3,500	2,249	1,251	-	2016	2014	100%
강천산 군립공원개발사업	3,100	988	890	1,222	2017년	2014	61%
작은영화관 및 청소년문화의집 건립사업	4,623	4,623	-	-	2015년	2014	100%
순창군 공공 승마장 조성사업	5,700	1,523	4,177	-	2016	2014	100%
다용도 보조 경기장 조성사업	5,280	1,000	1,780	3,500	2018	2015	20%
한국형유용균주 산업화기반구축	16,000	3,400	7,000	5,600	2020	2015	40%
6차산업 융복합 농촌체험 기반조성사업	2,640	-	1,761	879	2017	2015	80%
친환경농업 연구센터건립	10,300	440	3,106	6,754	2017	2015	22%
순창 수(Water) 체험센터 건립	9,000	-	288	8,712	2019	2015	20%

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
섬진강 장군목 생태관광지 조성사업	7,300	25	676	6,550	2024년	2015	9%
지산~안정선 도로 (3공구) 확포장공사	6,000	1,902	1,173	2,925	2020	2015	41%
전북형 농촌관광 거점마을 육성사업	3,000	362	1,106	1,532	2018년	2015	30%
강천산 대표관광지 육성	5,800	-	1,000	4,800	2019	2015	30%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

순창 실내다목적구장 건립사업

담당자

체육문화시설사업소

조동진(☎ 650-5524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사계절 이용 가능한 체육시설 조성으로 군민 건강증진 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 순창군 순창읍 교성리 244-3, 공설운동장 내

○ 규 모 : 돔구장 1동(2716.08㎡) 신축 및 부대시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	2,480	520	-	-
국 비	900	441	459-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,400	1,339	61	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	700	700	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 실내다목적(돔)구장 1동 신축 완료 ----------------------------------- `15. 11월

○ 태양광발전장치(50kW) 설치완료--------------------------------------- `15. 12월

○ 보조주차장 설치 완료 ---------------------------------------------------- `16.  7월

○ 부대시설(기둥 보호패드, 이동식 객성 등) 설치 완료----------- `16. 12월

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

교성지구 하수관거 정비사업

담당자

환경수도과

이종대(☎ 650-1743)

□ 사업목적 및 필요성

○ 순창 외곽지역의 발생 오수를 공공하수처리시설로 유입 처리하여 맑고        깨끗한 생활환경을 조성하고 수질개선으로 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017. 9월

○ 위 치 : 순창읍 교성리 일원

○ 규 모 : 오수관로 11.4km, 가정배수설비 459가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,164백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,164	1,584	3,728	1,852	-
국 비	5,015	1,109	2,610	1,296	-
시 도 비
시군구비	2,149	475	1,118	556	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 하수관거 정비사업 발주 --------------------------------------------------- ‘15. 7월

○ 오수 관로 시공  -----------------------------------------------------------  ’16. 12월

□ 향후계획

○ 오수관로 시공 완료 및 가정배수 시공 -------------------------------- ’17. 7월

○ 포장 및 준공  ----------------------------------------------------------------- ‘17. 9월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

구미지구 마을하수도 정비사업

담당자

환경수도과

이종대(☎ 650-1743)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을 발생 하수가 여과 처리과정 없이 인근 하천으로 유입 오염되고

있어 마을단위별 하수처리로 수질개선 및 지역주민 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 4월 ~ 2016. 5월

○ 위 치 : 순창군 동계면 구미리 일원

○ 규 모 : 오수관로 2.88km, 가정배수설비 116가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,300	1,903	397-	-	-
국 비	1,600	1,322	278-	-	-
시 도 비
시군구비	700	581	119	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 구미지구 마을하수도 정비사업 실시설계 용역 완료 -------------- ‘13. 8월

○ 마을하수도 정비사업 발주 ------------------------------------------------ ‘14. 3월

○ 하수처리장 설치 및 오수 관로 시공 ---------------------------------- ’16. 5월

○ 사업 준공 및 마을하수처리장 운영 ------------------------------------ ‘16. 5월

□ 향후계획

○ 없 음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

축산진흥센터 조성사업

담당자

농축산과

임송호(☎ 650-5645)

□ 사업목적 및 필요성

□ 순창 명품 축산물 유통 및 판매망 구축을 통한 축산농가 소득 증대

□ 강천산과 민속마을, 승마장을 연계한 축산물 판매로 6차 산업화

□ 사업개요

□ 기    간 : 2016. 1월 ∼ 2017. 8월

□ 위    치 : 팔덕면 구룡리 630번지 일원 (신평 찬물유원지내)

□ 규    모 : 전체부지 11,650㎡, 건물 4동 1,749.97㎡                                    (축산진흥센터, 음식점, 홍보관, 기계실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	500	920	1,580
국 비	1,500	500	368	632
시 도 비	500		184	316
시군구비	1,000		368	632

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

❍ 건축 ․ 전기공사 준공 -------------------------------------------------- 2017. 8월

❍ 도시계획 준공---------------------------------------------------------------- 2017. 8월

□ 향후계획

❍ 위탁 수의계약 모집공고 및 계약체결-------------------------------- 2017. 9월

※ 시설물 인계․인수 및 개장준비

❍ 축산진흥센터 개장 운영 -------------------------------------------------- 2017. 10월

사업명

순창 농특산물활용

식문화융합 기반 조성사업

담당자

건강장수사업소 김 욱

(☎ 650-1524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 순창 농․특산물 활용한 고부가가치 식품산업 육성으로 농촌의 6차산업화

○ 고유한 건강장수문화의 특화자원 연계 체험관광 상품으로 도농교류 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 순창군 인계면 인덕로 427-128 일원

○ 규 모 : 식문화 실습관 1동/ 힐링워터공원 조성 1식/

농산물 유통시설 조성 1동/ 도농 체험프로그램 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,500	2,249	1,251	-	-
국 비	1,750	1,125	625	-	-
시 도 비	900	578	322	-	-
시군구비	850	546	304	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 농산물 유통시설 조성 완료 및 식문화 실습관 완공------------------‘16. 8월

○ 힐링워터공원 조성 완료(‘17. 6), 식문화 도농교류 체험프로그램 운영 :  9회(317명)

○ 농업인실용교육운영 : 11회(27명) / 농산물 홍보 마케팅 사업추진(아로니아외 3개품목, 27톤)

□ 향후계획

○ 식문화 실습관 및 힐링워터공원 연계 도농체험 프로그램 개발 및 지속 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

강천산군립공원 개발사업

담당자

산림공원과 김학명

(☎ 650-1928)

□ 사업목적 및 필요성

○ 늘어나는 관광수요 충족

○ 관광객 편익시설 증가에 따른 관광객 증가로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 전라북도 순창군 팔덕면 강천산군립공원 일원

○ 규 모 : 계곡탐방로 정비 2.5km, 등산로 정비 12km, 화장실 신축 2개소,

주차장 정비 1개소, 팔각정 정비 1개소 등 59건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,100	988	890	1,222
국 비	1,550	494	445	611
시 도 비	800	255	231	314
시군구비	750	239	214	297
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 61%)

○ 강천산 여성 친화형 화장실 신축 등 44건 완료

□ 향후계획

○ 강천산 계곡 탐방로 정비 등 15건 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

작은 영화관 및 청소년

문화의집 건립사업

담당자

문화관광과 정승태

(☎ 650-1635)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영화를 보기 위해 도시로 나가야 시간적, 경제적 낭비요인을 줄이고

도시와 농촌 간의 문화적 격차를 해소하기 위함

○ 영화관과 청소년문화의집를 한 건물안에 설치 운영함에 따라 순창군을        대표하는 복합문화공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 3. ~ 2015. 12.

○ 위 치 : 순창읍 남계로 83(남계리 471)

○ 규 모 : 부지면적 4,569㎡

- 연면적 : 1,371㎡(영화관 645, 청소년문화의집 569, 기타 157)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,623백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,623	4,623
국 비	1,550	1,550
시 도 비	300	300
시군구비	2,323	2,323
지 방 채
민간자본	100	100
기 타	350	350

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 작은영화관 및 청소년 문화의집 건립공사 ------------------------- 2015. 9월

○ 군의회 민간위탁 동의안 의결 ------------------------------------------ 2015. 9월

○ 영화관 수탁자 선정 ------------------------------------------------------- 2015. 9월

○ 영화관 위‧수탁자 협약 및 관리위탁 -------------------------------- 2015. 10월

○ 영화관 개관식  ------------------------------------------------------------ 2015. 10월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

순창군 공공승마장 조성사업

담당자

체육문화시설사업소

조동진(☎ 650-5524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광산업과 연계한 체류형 승마장 조성으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2016년

○ 위 치 : 순창군 팔덕면 구룡리 5-1번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 19,777㎡, 건물 3동(마사, 사무실, 실내마장) 3,291.8㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,700	1,523	4,177	-	-
국 비	800	14	786	-	-
시 도 비	360	7	353	-	-
시군구비	4,540	1,502	3,038	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 공공승마장 조성사업 착공 ----------------------------------------------- `15. 9월

○ 공공승마장 준공 ----------------------------------------------------------- `16. 10월

□ 향후계획

○ 체육관련 부서로 업무 이관 ---------------------------------------------- `17. 2월

□ 사업변경 내역

○ 공사현장 내 설계변경 요인(암발파 등)이 발생하여 사업비 증액

(사업비 : 당초 5,000백만원 → 변경 5,700백만원)

사업명

다용도 보조경기장 조성사업

담당자

체육문화시설사업소

조동진(☎ 650-5524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육시설 인프라 확충 및 각종 대회, 사계절 전지훈련 유치를 통한

지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 순창군 팔덕면 구룡리 일원(구룡 27-1외 31필지)

○ 규 모 : 부지면적 51,558㎡, 축구·야구 겸용구장 1개소, 야구장 1개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,280	1,000	1,780	3,500	-
국 비	1,050	-	-	1,050	-
시 도 비
시군구비	4,230	1,000	1,780	2,450	-
지 방 채

□ 추진상황(토지매입률 : 79%)

○ 토지매입 지속 추진 : 33필지 중 26필지 매입완료

○ 사전재해영향성검토(행정절차) 및 환경성검토 용역 -------------- `16. 9월

○ 군계획시설 변경결정 용역 ---------------------------------------------- `16. 11월

□ 향후계획

○ 문화재조사 및 실시설계 용역, 행정절차 완료 --------------------- `17. 8월

○ 토지매입(수용) 완료 --------------------------------------------------------- 17. 9월

○ 공사착공 ---------------------------------------------------------------------- `17. 10월

□ 사업변경 내역

○ 기정 군계획시설(공공승마장)에 보조경기장을 편입하여 체육시설 지구 범위를 확장함으로써, 녹지용지 확보로 야구장 1개소 추가 조성 가능해짐에 따라 효율적 부지활용을 위해 경기장 2개소 조성 추진

(사업비 : 당초 4,400백만원 → 변경 5,280백만원)

사업명

한국형 유용균주

산업화기반 구축사업

담당자

순창군장류사업소 김현영

(☎ 650-5451)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전북의 전통미생물을 보존, 발굴, 산업화하여 산업주권 확보(균주특허)와

발효미생물 관련 중소기업들의 경쟁력 강화 및 매출 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 7 ~ 2020. 6(5년)

○ 위 치 : 전라북도 일원

○ 규 모 : 토착유용균주 연구용 DB구축(2,500주), 한국형유용균주선발(215주),

글로벌 평가기술구축, 균주상용화(50건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원(국비10,000 도비2,000, 군비3,000, 민간1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	16,000	1,700	3,500	3,200	7,600
국 비	10,000	1,000	1,800	2,000	5,200
시 도 비	2,000	200	600	400	800
시군구비	3,000	300	900	600	1,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,000	200	200	200	400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2차년도 완료, 40%)

○ 2차년도 사업평가 완료

○ 연구용 유용균주 선발 및 DB구축(646주), 한국형유용균주선발(30주),

상품화지원(10건), 유용균주 평가시스템 구축 추진 중

□ 향후계획

○ 3차년도 협약 체결 준비

○ 한국형 유용균주 선발 및 DB구축, 상품화 지원 등 추진

- 연구용 균주 500주 이상, 산업용 후보균주 35주, 기업지원 13개소

- 장비구축 5종, 특허출원 6건 이상, 논문 2건 이상

○ 한국형 유용균주 통합관리시스템 구축 : ‘17년 하반기 개설 예정

○ 건강장수 미생물 지도 : 유전체 분석 35주, 발효식품 군집분석 100종

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

6차산업 융복합

농촌체험기반 조성사업

담당자

건강장수사업소 김 욱

(☎ 650-1524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쉴랜드(SHIL Land)지구를 중심으로 힐링 체험과 관광자원을 활용한

순창의 미래 산업 기반 구축

○ 건강장수문화의 특화자원을 활용한 체험관광 상품으로 도농교류 활성화를

통해 6차 산업의 인프라 구축과 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 순창군 인계면 인덕로 427-128 일원

○ 규 모 : 농촌체험 산야초․약초 경관지구 1식, 농업농촌휴양단지 조성 1식,

도농교류 체험프로그램 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,640백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,640	-	1,761	879	-
국 비	1,320	-	881	439	-
시 도 비	695	-	458	237	-
시군구비	625	-	422	203	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 산야초․약초 경관지구(‘16.10) 및 농업휴양단지 부지조성 착공(‘17.7)

○ 식문화도농교류체험프로그램 운영 : 23회(937명)/힐링체험프로그램 및 컨텐츠 개발(1종)

○ 산야초식단 개발(32종)/순창산 농산물을 활용한 기능성식품소재 개발 및

고부가가치 제품화 연구 : 7건(특허 5, 논문투고 6, 시제품 6종)

□ 향후계획

○ 농촌체험 산야초․약초 경관지구 조성 준공 ------------------------ ‘17. 9월

○ 농업휴양단지 부지조성 준공 --------------------------------------------- ‘18. 7월

○ 식문화 도농교류 및 힐링체험 프로그램 지속 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

친환경농업연구센터 건립

담당자

친환경농업과

서준용(☎ 650-5185)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유기농업 기술개발, 실용화 연구 및 교육을 통한 기존농업의 체질개선

○ 저비용 유기농자재 생산․공급, 실용화 교육을 통한 지속가능한 농가

자립형 친환경농업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2017.(4년)

○ 위 치 : 순창군 유등면 건곡리 1425번지 외 4필지

○ 규 모 : 연구동(2,133㎡), 실증온실(1,219㎡), 연구실용화시설(496㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	10,300	440	3,106	6,754	-
국 비	5,000	140	2,286	2,574	-
시 도 비	1,500	-	123	1,377	-
시군구비	3,800	300	697	2,803	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2014년도 국가공모사업 선정, 투융자심사 완료, 부지매입, 건축설계완료

○ 건축공사 착공 :--------------------------------------------------------------- ‘16. 5월

○ 건물 내·외부 마감공사 중

□ 향후계획

○ 친환경농업연구센터 건립공사 준공 ------------------------------------ ‘17. 8월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

순창 수(Water) 체험센터 건립

담당자

건강장수사업소 김영진

(☎ 650-1531)

□ 사업목적 및 필요성

○ 음용온천수 등 자연자원을 활용 건강과 관광이 융합된 관광산업 창출

○ 특화된 건강증진 시스템 개발 및 운영으로 장기 체류형 관광객 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 839 일원

○ 규 모 : 수체험센터(2,904.57㎡), 온천관광정원

- 수체험센터 : 치유누리실, 사우나실, 음이온․수소 등 테라피, 놀이방, 스넥바 등

- 온천관광정원 : 온천족욕탕, 어린이놀이터, 명상정원, 온천산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,000	-	288	3,000	5,712
국 비	4,500	-	144	1,500	2,856
시 도 비	2,250	-	72	750	1,428
시군구비	2,250	-	72	750	1,428
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 지방재정 투자심사 완료(‘15.7.), 중기지방재정계획 반영(’15.11)

○ 공유재산 관리계획 승인 --------------------------------------------------- ‘15. 12월

○ 순창 수 체험센터 건립사업 실시설계 추진 --------------------------- ’17. 7월

□ 향후계획

○ 순창 수 체험센터 건립사업 계약의뢰(조달청) ----------------------- ‘17. 8월

○ 순창 수 체험센터 건립사업 착공 : --------------------------------------‘17. 10월

○ 순창 수 체험센터 건립사업 추진 및 준공 --------------------------- ’19. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

섬진강장군목 생태관광지 조성사업

담당자

환경수도과

강정훈(☎650-1722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 생태자원을 현명하게 이용하여 생태관광사업 다변화에 기여

○ 섬진강 상류지역의 브랜드 가치 향상과 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2024년

○ 위 치 : 섬진강 장군목(전북 순창군 적성면, 동계면)

○ 규 모 : 수변생태로 조성 10㎞외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,251	25	676	950	5,600
국 비	3,600		325	475	2,800
시 도 비	1,851	25	188.5	237.5	1,400
시군구비	1,800		162.5	237.5	1,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

○ 섬진강장군목 생태관광지조성 종합 마스터플랜 수립--------------- ‘16. 2월

○ 수변생태로 조성공사(이팝나무 외 3종, 1,494주 식재) ------------ ‘16. 12월

□ 향후계획

○ ‘17년 사업(신비한 요강바위 탐방길 조성) 실시설계 용역 및 사업추진 : ’17. 9 ~

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

지산~안정선 도로 확포장공사

담당자

안전건설과

황선하(☎ 650-1821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민 교통편익 증진 및 지역간 균형발전 도모로 지역경제 활성화

○농산물 유통 편익으로 농가소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2003. 8. ~ 2020. 12

○ 위 치 : 전북 순창군 인계면 지산리~순창군 구림면 율북리

○ 규 모 : 도로 확포장 L=4.34Km, B=8.0m(포장폭 6.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,000	1,902	1,173	700	2,225
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	1,902	1,173	700	2,225
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 41 %)

○도로 확포장(1공구)완료 L=1.98km, B=8.0m ---------------------------- ‘16. 12월

○도로 확포장 실시설계 완료(잔여구간 L=2.36km) -------------------- ‘17. 03월

□ 향후계획

○ 도로 확장공사 용지 보상 및 사업추진 ------------------------------- ‘17. 4월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

전북형 농촌관광

거점마을 육성사업

담당자

순창군 농촌개발과

임근택(☎ 650-1751)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민선6기 전북도 정책사업“삼락농정, 사람찾는 농촌 조성”의 일환으로

추진중인 광역단위의 농촌관광시스템 구축으로 마을사업의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018(4개년)

○ 위 치 : 순창군 쌍치면 금성리 피노마을 일원

○ 사업내용 : 농촌관광거점센터, 글램핑장, 서바이벌체험장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원(지특 1,500, 군비 1,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	362	1,106	1,032	500
국 비	1,500	181	553	516	250
시 도 비
시군구비	1,500	181	553	516	250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 마을사업 공모 최종확정 --------------------------------------------------- ‘15.  7월

○ 마을법인 구성 설립(피노우리영농조합법인) ------------------------ ‘15. 11월

○ 기본계획 수립용역 발주-----------------------------------------------------‘16.  6월

○ 기본계획 전북도 최종승인 ----------------------------------------------- ‘17.  5월

□ 향후계획

○ 실시설계 완료 및 토목공사 발주 --------------------------------------- ‘17. 8월

○ 서바이벌 체험장 시설공사 착수 ----------------------------------------- ‘17. 9월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

강천산 대표관광지 육성

담당자

문화관광과 김다미

(☎ 650-1632)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강천산군립공원의 관광 명소화 추진에 따른 관광파급효과 확산으로 섬진강 등 주변 관광지역의 유기적 발전에 따른 순창 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 3 ~ 2019. 12

○ 위 치 : 전북 순창군 팔덕면 청계리 일원

○ 규 모 : 20건(기반사업 3건, 진흥사업 17건)

- 기반시설 : 동굴형 체험관조성, 다목적 주차장, 강천산 야간명소화

- 진흥사업 : 관광상품 및 코스개발(4), 관광이벤트(4), 관광홍보 마케팅(5), 관광안내 체계구축(4)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,655백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,655	1,000	1,000	1,855	2,800
국 비	1,300			500	800
시 도 비	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000
시군구비	355			355	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 대표관광지 기본계획 수립용역완료 ---------------------------------- ’15. 10월

○ 코레일 관광객 연계시스템구축 --------------------------------‘15. 9월 ~ 12월

○ 팸투어 실시(매월 3~4회) -------------------------------------------------- ‘16. 5월

○ 동굴형 체험관 조성사업 공사발주  ------------------------------------ ‘16. 4월

○ 맨발로 걷는 사랑나눔 행사 추진 --------------------------------------- ‘16. 5월

○ 관광홍보 마케팅 및 관광안내 체계 구축사업추진---------- '16. 3월~12월

□ 향후계획

○ 사업계획 분야별 추진 ------------------------------------- ’17. 1월 ~ ‘19. 12월

- 기반시설 : 동굴형 체험관조성, 다목적 주차장, 강천산 야간명소화 사업

- 진흥사업 : 관광상품 및 코스개발(4), 관광이벤트(4), 관광홍보 마케팅(5), 관광안내 체계구축(4)